RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2006

Temat: Zawarcie znaczącej umowy

RESBUD S.A. informuje, że w dniu 15.05.2006 roku otrzymał podpisany 
w dniu 18.04.2006 r. Aneks Nr 1 do Umowy zawartej w dniu 19.01.2006 r. z firmą POLNORD S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Raport bieżący nr 2/2006 z dnia 08.02.2006r.) dotyczący realizacji inwestycji pt.” Zespół mieszkaniowy wielorodzinny Warszawa – Bemowo ul. Obrońców Tobruku/ Księcia Bolesława”. Podpisany Aneks rozszerza zakres prac określony w Umowie z dnia 19.01 br. o wykonanie:
•	Konstrukcji żelbetowej stanu zero budynku etap II
•	Konstrukcji żelbetowej nadziemia budynku etap II
•	Konstrukcji żelbetowej nadziemia budynku etap III
Termin wykonania ww. prac został ustalony na dzień 31 października 2006 roku, natomiast termin wykonania prac, o których Zarząd informował w Raporcie bieżącym Nr 2/2006 z dnia 08.02.2006 r. został przesunięty na dzień 31 lipca 2006 roku. 
Wynagrodzenie za wykonanie robót określonych w Aneksie Nr 1 z dnia 18.04.06 r. zostało ustalone na kwotę 4.680.000 zł netto, natomiast wynagrodzenie za wykonanie całego zadania inwestycyjnego pt. ” Zespół mieszkaniowy wielorodzinny Warszawa – Bemowo ul. Obrońców Tobruku/ Księcia Bolesława” zostało ustalone zgodnie z opracowanym kosztorysem ofertowym na kwotę 9.030.000,00 zł netto.
Warunki finansowe umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.
Niniejszym umowa ta stanowi umowę znaczącą, bowiem wartość umowy przekracza 20% wartości przychodów ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO – Obowiązki informacyjne emitentów.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę 
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	
2006-05-16	Andrzej Skarbek	Dyrektor Naczelny/ Prezes Zarządu